▷ 관리번호 : 285-4

발언일자	2019년 10월 15일 제285회 강원도의회(임시회) 제1차 본회의
발언의원	기획행정위원회 한창수 의원
발언요지	제 목	횡성초등학교 건축․시설에 관하여
	ㅇ 현재, 횡성초등학교 환경개선사업이 학기 중에 진행되고 있어 학생들은 공사현장에서 미세먼지를 마시면서 어려운 환경 속에서 수업을 받고 있음. ㅇ 공사현장에는 학생을 위한 안전표지판, 안전현수막, 안전을 위한 시설물이 부족하여 안타까움 ⇒ 학생들이 미세먼지를 덜 마시면서 공부할 수 있는 안전하고 쾌적한 환경을 만들어주실 것을 당부
추진상황	소관부서	시설과 시설운영담당 (연락전화 : 033-258-5174)
	추진일자	추진내용 및 향후계획
		1. 본예산 사업 추진 경과(화장실보수6실, 내진보강1식, 천장교체4실) 가. 설계용역 발주 : 2019. 1. 8. 나. 설계용역 납품 : 2019. 3. 14.(건축사사무소 다인 대표 이명호) 다. 일상감사 의뢰 : 2019. 6. 27. 라. 일상감사 조치결과 제출 : 2019. 7. 9. 2. 1회 추경 사업 추진 경과(창호교체49실, 외벽보수49실, 다목적실 보수1994.75㎡) 가. 설계용역 발주 : 2019. 5. 27. 나. 설계용역 납품 : 2019. 6. 27.(건축사사무소 담아 대표 박승철) 다. 일상감사 의뢰 : 2019. 8. 14. 라. 일상감사 조치결과 제출 : 2019. 9. 4.(공사의 시급성으로 사후 제출) 3. 공사추진 현황 본예산 확보된 화장실 보수 및 내진보강 특성상 방학기간중 사업 불가피 하여 1회 추경 확보된 사업과 통합하여 공사 추진 가. 공사발주 : 2019. 7. 10.(공사기간 : 120일) 나. 계약관련 사항(일반공개경쟁-전국) - 공고일 : 2019. 7. 15. - 개찰일 : 2019. 7. 22. - 개찰결과 : 378개 업체 투찰하여 ㈜지인데코 낙찰 다. 계약사항((주)지인데코 대표 이강수) - 계 약 일 : 2019. 7. 30. - 착 공 일 : 2019. 7. 30. - 준공예정일 : 2019. 11. 26. - 변경준공일 : 2019. 12. 14.(우천으로 인한 공사불가로 18일연장) 라. 12월13일 현재 : 공사완료 (2019.12.23.준공검사예정)
	처리구분	1. 처리완료 □ 2. 계속추진 3. 임기종료(종결)