2023년도 제2차 수시분 공유재산 관리계획안

강   원   도

2023년도 제2차 수시분 공유재산 관리계획안

의 안 번 호		제출연월 : 제 안 자 :	2023년 3월 강원도지사

1. 제안이유

□ 금번 제출하는 “2023년도 제2차 수시분 공유재산 관리계획안” 은

- 「공유재산 및 물품 관리법」제10조의2 및「강원도 공유재산 관리 조례」

제12조의 규정에 의한 계획으로서 취득 1건임

□ 취득 사유는

○ 반도체 교육센터 취득(신축)

- 2023년도 중소벤처기업부의「강원 공유형 반도체 교육센터 장비 구축」사업비 200억 원을 확보함에 따라, 우리 도의 핵심사업으로 추진 중인 반도체 클러스터 조성 및 반도체 산업 생태계 조성을 위한 전문인력 양성기관으로 반도체 교육센터를 신축

2. 주요골자

□ 취   득 : 1건

구 분

수 량(면적)

금 액

비 고

건물

신축

1동, 3,000㎡

15,700백만 원

총사업비 : 46,000백만 원

· 장비 구축 : 20,000

· 건축(설계등) : 15,700

· 운      영 : 10,300

반도체 교육센터 신축

3. 세부내역

□ 반도체 교육센터 취득(신축)

1) 사업목적 및 용도

○ (목적) 반도체 교육센터를 신축하여 원주 반도체 클러스터 조성을

위한 공공 전문인력 양성기관으로 교육 서비스 및 공간 제공

○ (용도) 반도체 교육(공정실습 클린룸, 테스트실, 강의실, 회의실 등)

2) 사업기간 : 2023년 ~ 2027년

3) 소요예산 : 총 46,000백만 원(국비 20,000, 도비 13,000, 시비 13,000)

※ 건축비(설계 및 공사 등) : 15,700백만 원

○ 연도별 사업비

(단위 : 백만 원)

구 분	소요액	국 비	도 비	시 비	구 분
합 계	46,000	20,000	13,000	13,000	-
2023년	21,100	20,000	550	550	장비 및 설계 등
2024년	9,400	-	4,700	4,700	공사 및 임시운영
2025년	7,000	-	3,500	3,500	공사 및 일부운영
2026년	5,200	-	2,600	2,600	공사 및 정식운영
2027년	3,300	-	1,650	1,650	정식운영

○ 공정별 사업비 내역

(단위 : 백만 원)

구 분		소요액	국 비	도 비	시 비
계		46,000	20,000	13,000	13,000
항목	설계비	800	-	400	400
	공사비	14,900	-	7,450	7,450
	장비비	20,000	20,000	-	-
	운영비	10,300	-	5,150	5,150

4) 사업규모

○ 위치 : 원주시 학성동 469-1

○ 규모 : 1개동, 부지면적 2,860㎡, 연면적 3,000㎡

구 분	면적(㎡)	용 도	비 고
전 체	3,000	반도체 교육센터	-
지하1층*	-	기계실, 전기실, 발전실 등	500㎡
1층	2,000	공정실습 클린룸, 조립실, 테스트실	-
2층	1,000	설계실습실, 성능분석실, 강의실, 사무공간 등

* 지하층수는 용적률 기준 건축 연면적에 미포함

B1(기계실 등)	1F(공정 실습실)	2F(설계+분석실)

5) 기준가격 명세

구 분	토 지	건 물
반도체 교육센터	원주 시유지	15,700백만 원

6) 계약방법 : 설계용역(일반 설계공모) 및 공사(일반입찰 등)

7) 세부운영계획

○ 사업기간

- 중앙투자심사 및 추가경정예산(지방비) 확보 : ’23. 4월 ~ 8월

- 실시설계 및 부지 기반조성 : ’23. 9월 ~ ’24. 9월

- 건축물 신축 : ’24. 10월 ~ ’26. 6월

○ 운영계획

- 운영 : 강원테크노파크 반도체 교육센터팀 신설·운영

(현 TF팀 운영 → ’23. 7월 조직개편 시 신설)

- 인원 : 임시운영(현 TF팀) 5명 → ’26년 정식운영 시 10명

- 역할 : 반도체 교육 프로그램 운영, 장비 관리, 시설물 관리 등

2023년도 제2차 수시분 공유재산 관리계획안

(강원도)                                                 (단위 : ㎡, 백만 원)

구 분	건 명	수 량	면 적	금 액
취득	◦ 반도체 교육센터 취득 - 건물(신축)	1동	3,000	15,700
	이	하	여	백

2023년도 제2차 수시분 관리계획 총괄표(2-1)

회계명 : 일반회계                                                (단위 : ㎡, 백만 원)

구 분			당 초			변 경			증 감
			수량	면적	금액	수량	면적	금액	수량	면적	금액
취득	계	토지
		건물	1동	3,000	15,700
		주식
	1. 매 입	토지
		건물
		기타
	2.. 교환으로 취득	토지
		건물
		기타
	3. 기타취득	토지
		건물	1동	3,000	15,700
		주식
처분	계	토지
		건물
		주식
	4. 매 각	토지
		건물
		주식
	5. 양 여	토지
		건물
		기타
	6. 기타처분	토지
		건물
		기타
	7. 교환으로 처분	토지
		건물
		기타

2023년도 제2차 수시분 취득대상 재산목록(2-2)

회계명 : 일반회계                                     (단위 : ㎡, 백만 원)

일련번호	재 산 표 시			기준가격	취득시기	취득사유	비고
	지목	소재지	면적 (수량)
1	건물	원주시 학성동 469-1	3,000 /1동	15,700	2026. 하반기	반도체 교육센터 취득	반도체산업추진단
		이	하	여	백